Распоряжение Администрации Томской области от 21.05.2024 N 368-ра
(ред. от 15.01.2025)
"Об утверждении паспортов ведомственных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы "Развитие образования в Томской области"
(вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования", "Паспортом ведомственного проекта "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций", "Паспортом ведомственного проекта "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)", "Паспортом ведомственного проекта "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования", "Паспортом ведомственного проекта "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения")	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.02.2025

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2024 г. N 368-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 11.10.2024 N 715-ра, от 13.01.2025 N 12-ра, от 15.01.2025 N 15-ра)		

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 342а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области" утвердить:
1) паспорт ведомственного проекта "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт ведомственного проекта "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ведомственного проекта "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
4) паспорт ведомственного проекта "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
5) паспорт ведомственного проекта "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора
Томской области
Н.Я.РУППЕЛЬ

Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма 2 (направление) "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей	ВП	ДОО ТО	ед.	8	2023	35	-	-	-	-	Возрастающий	нет	-	
2.	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений	ВП	ДОО ТО	ед.	-	2023	117	-	-	-	-	Убывающий	нет	-	

План достижения показателей ведомственного
проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области	
1.1.	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей	ВП	Ед.	0	0	0	0	0	0	9	10	10	22	35	35	
1.2.	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений	ВП	Ед.	0	0	10	23	34	48	65	85	90	110	117	117	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация структурированных кабельных сетей	%	8	2023	35	-	-	-	-	Разработка проекта модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования и расходных материалов для модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций, оплата монтажных работ согласно проекту по модернизации структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	Муниципальные общеобразовательные организации провели модернизацию структурированных кабельных сетей	
2.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	Число муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений за счет средств субсидии	Ед.	-	2023	14	-	-	-	-	Реализация мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), представлениях органов прокуратуры, исполнение судебных актов	Приобретение товаров, работ, услуг	Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
Ведомственный проект "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования" (всего), в том числе:	ДО ТО	70107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		38807,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		31300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций	ДО ТО	7507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	ДО ТО	62600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		31300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		31300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	0,0	1930,5	2145,0	2145,0	2145,0	4719,0	7507,4	7507,4	7507,4	7507,4	7507,4	
2.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	0,0	2900,0	5000,0	10078,0	10078,0	12428,0	17528,5	23008,3	28300,0	31300,0	31300,0	31300,0	
ИТОГО	0,0	2900,0	6930,5	12223,0	12223,0	14573,0	22247,5	30515,7	35807,4	38807,4	38807,4	38807,4	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1.	Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области	
1.1.	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	7507,4	0,0	-	-	-	
1.1	Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	7507,4	0,0	-	-	-	
1.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Областной закон	нет	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
1.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Реестр соглашений)	да	-	
1.1.К.3	Утвержден порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образования	-	25.04.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Постановление	нет	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
1.1.К.4	Сформирована и утверждена потребность	-	31.05.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
1.1.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	31.08.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Реестр)	да	-	
1.1.К.6	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
1.2.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	62600,0	0,0	-	-	-	
1.2.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	62600,0	0,0	-	-	-	
1.2.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Областной закон	нет	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
1.2.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Реестр соглашений)	да	-	
1.2.К.3	Утвержден порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образования	-	25.04.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Постановление	нет	Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
1.2.К.4	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	31.05.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
1.2.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	31.08.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Реестр)	да	-	
1.2.К.6	Приобретенные товары поставлены на баланс	-	30.11.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ) ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 11.10.2024 N 715-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент строительства Томской области	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год				
1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций	ГП, ГП РФ	Департамент строительства Томской области	Единица	-	2023	2	0	0	0	0	Возрастающий	нет	-	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций	ГП, ГП РФ	Единица	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7	Уровень технической готовности объектов капитального строительства	Процент	-	2023	100	0	0	0	0	Осуществление строительства детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций	
2.	Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19			-	2023	100	0	0	0	0	Осуществление строительства здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением 2 групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19			

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
Ведомственный проект "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" (всего), в том числе:	Департамент строительства Томской области	63715,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		57868,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		5846,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1. "Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7" (всего), в том числе:		33639,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		33639,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2. "Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19" (всего), в том числе:		30075,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		24229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		5846,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33639,3	
2.	Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24229,2	
ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57868,5	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1.	Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	
1.1.	Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Департамента строительства Томской области Ассонов Д.Ю.	мест	280	33639,3	0,0	-	-	-	
1.1. К.1	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	28.06.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.1. К.2	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.08.2024		-	-	-	-	Заключение	нет	-	
1.1. К.3	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	05.08.2024		-	-	-	-	Разрешение	нет	-	
1.1. К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.1. К.5	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024		-	-	-	-	Свидетельство о регистрации права	нет	-	
1.2.	Строительство здания МБОУ "Саровская СОШ" с размещением двух групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19	12.08.2024	31.12.2024	Начальник Департамента строительства Томской области Ассонов Д.Ю.	мест	140	24229,2	0,0	-	-	-	
1.2. К.1	Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.2. К.2	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.11.2024		-	-	-	-	Заключение	да	-	
1.2. К.3	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	05.11.2024		-	-	-	-	Разрешение	да	-	
1.2. К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	да	-	
1.2. К.5	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024		-	-	-	-	Свидетельство о регистрации права	да	-	

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ
НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 11.10.2024 N 715-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент образования Томской области (далее - ДОТО)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <2>	Планируемое значение показателя (показателя задачи) на 2024 год и прогнозный период 2027 и 2028 годов	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	ВП	Департамент строительства Томской области (далее - ДС ТО); ДОТО	Ед.	-	2023	3	-	-	-	-	Возрастающий	нет	-	
2.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ВП	ДОТО	Ед.	-	2023	2	-	-	-	-	Возрастающий	нет	-	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)	
1.1.	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	ВП	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	
1.2.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ВП	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия на 2024 год и прогнозный период 2027 и 2028 годов	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а	количество отремонтированных объектов	ед.	-	2023	1	0	0	0	0	Проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	
2	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 46А, строение 5	количество отремонтированных объектов	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществление расходов на проведение капитального ремонта части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 46А, строение 5	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	
3	Капитальный ремонт кровли и фасада Объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10	количество отремонтированных объектов	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществление расходов на проведение капитального ремонта объекта имущественного комплекса областных государственных организаций: объект культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10. Капитальный ремонт кровли и фасада (ТОИПКРО)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	
4	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	количество отремонтированных объектов	ед.	-	2023	1	0	0	0	0	Проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	
5	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	количество разработанной ПСД, ед.	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
Ведомственный проект "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" (всего), в том числе:	ДОТО; ДС ТО	196825,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		196662,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а (всего), в том числе:	ДС ТО	102431,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		102329,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт кровли и фасада Объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10	ДОТО	15226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		15226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 46А, строение 5	ДОТО	15481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		15481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	ДС ТО	60060,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		60000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	ДС ТО	3625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102329,5	102329,5	
2	Капитальный ремонт кровли и фасада Объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15226,4	15226,4	15226,4	15226,4	
3	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 46А, строение 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15481,0	15481,0	15481,0	15481,0	15481,0	
4	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60000,0	
5	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3625,7	0,0	0,0	3625,7	
ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15481,0	34333,1	30707,4	133036,9	196662,6	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1	Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)	
1.1	Капитальный ремонт здания МБОУ "Коломиногривская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	102329,5	0,0	-	-	-	
1.1.К.1	Заключен контракт	-	30.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Контракт (договор)	да	ЕИС Госзакупки	
1.1.К.2	Техническая готовность, %	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.1.К.3	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Фотоматериалы	да	-	
1.1.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
1.2	Капитальный ремонт кровли и фасада Объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	15226,4	0,0	-	-	-	
1.2.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Нормативный акт	нет	-	
1.2.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.04.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Письмо	нет	-	
1.2.К.3	Техническая готовность, %	-	30.08.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.2.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
1.2.К.5	Произведена оплата работ	-	28.12.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.3	Капитальный ремонт части помещений нежилого здания ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 46А, строение 5	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	15481,0	0,0	-	-	-	
1.3.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Нормативный акт	нет	-	
1.3.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.04.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Письмо	нет	-	
1.3.К.3	Техническая готовность, %	-	30.08.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.3.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
1.3.К.5	Произведена оплата работ	-	28.12.2024	Начальник ДОТО Калинюк Ю.В.	-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.4	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	25.09.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	60000,0	0,0	-	-	-	
1.4.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	05.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Извещение	да	ЕИС Госзакупки	
1.4.К.2	Заключен контракт	-	30.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Контракт (договор)	да	ЕИС Госзакупки	
1.4.К.3	Техническая готовность, %	-	20.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.4.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
1.5	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	25.04.2024	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	3625,7	0,0	-	-	-	
1.5.К.1	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Отчет	да	ЕИС Госзакупки	
1.5.К.2	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Отчет	да	ЕИС Госзакупки	
1.5.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Отчет	да	-	
1.5.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	-	-	-	-	Акт о приемке работ	да	-	

Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 15.01.2025 N 15-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент образования Томской области (далее - ДОТО)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма 4 "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <2>	Планируемое значение показателя (показателя задачи) на 2024 год и прогнозный период 2027 и 2028 год	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	ВП	Департамент строительства Томской области (далее - ДС ТО); ДОТО	ед.	14	2023	10	35	30	-	-	Возрастающий	нет	ГИИС "Электронный бюджет"	
2.	Количество школьных команд (обучающиеся, учителя, родительское сообщество), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, ед.	ВП	ДОТО	ед.	13	2023	6	34	30	-	-	Возрастающий	нет	-	
3.	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	ВП	ДС ТО; ДОТО	ед.	2	2023	7	-	-	-	-	Возрастающий	нет	-	
4.	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	ВП	ДС ТО; ДОТО	ед.	24	2023	3	-	-	-	-	Возрастающий	нет	-	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	
1.1.	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1.2.	Количество школьных команд (обучающиеся, учителя, родительское сообщество), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, ед.	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	
1.3.	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
1.4.	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия на 2024 год и прогнозный период 2027 и 2028 год	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1.	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
2.	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
3.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К. Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
4.	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
5.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
6.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К. Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
7.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
8.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
9.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
10.	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
11.	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
12.	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
13.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
14.	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
15.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В. Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
16.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
17.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
18.	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
19.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
20.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
21.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
22.	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
23.	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
24.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
25.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
26.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И. Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
27.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
28.	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
29.	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
30.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
31.	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
32.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
33.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
34.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
35.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
36.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
37.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
38.	Капитальный ремонт нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
39.	Капитальный ремонт нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 2/3, строение 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
40.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
41.	Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
42.	Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
43.	Капитальный ремонт МБОУ "Чажемтовская СОШ", по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
44.	Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. N 458	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
45.	Капитальный ремонт МАОУ Улу-Юльская СОШ, по адресу: Томская обл., Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Советская, 18	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	1	-	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	30	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.1	МБОУ "Новоколоминская СОШ", по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.2	МОУ "СОШ N 5", по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.3	МКОУ "Побединская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, стр. N 1, пом. N 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.4	МКОУ "Вороновская НОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.5	МКОУ "Бабарыкинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Бабарыкино, ул. Садовая, 3	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.6	МКОУ "Анастасьевская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Анастасьевка, пер. Школьный, 2, пом. 2	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.7	МКОУ "Трубачевская ООШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 4 пом. 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.8	МКОУ "Малобрагинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Малобрагино, ул. Школьная, 1а, строение 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.9	МБОУ "Куяновская СОШ", по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.10	МБОУ "Березовская СОШ", по адресу: Томская область, Первомайский район, деревня Березовка, улица Центральная, дом 2	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.11	МКОУ "Вороновская СОШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.12	МКОУ "Елгайская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.13	МКОУ "Новопокровская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.14	МБОУ "Халдеевская ООШ", по адресу: Томская область, Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.15	МАОУ "Зональненская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.16	МБОУ "Петуховская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.17	МБОУ "Новорождественская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.18	МКОУ "Усть-Тымская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Береговая, 65	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.19	МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко", по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.20	МАОУ "Молчановская СОШ N 1", по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.21	МБОУ "Катайгинская СОШ", по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.22	МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А. Образцова, по адресу: Томская область, Парабельского района, с. Парабель, ул. Советская, 36	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.23	МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова", по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.24	МБОУ "Северский лицей", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.25	МБОУ "СОШ N 197", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.26	МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.27	МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22, стр. 4	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.28	МАОУ "Лицей N 1 имени А.С. Пушкина г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 30, стр. 1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.29	МАОУ "ООШ N 45 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 140/1	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
46.30	МАОУ "СОШ N 46 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Д. Бедного, д. 4	количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	ед.	-	2023	-	-	1	-	-	Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, включающего осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, располагающиеся в контуре зданий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
47.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
48.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
49.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
50.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
51.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
52.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
53.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций областной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций, ед.	
54.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	
55.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	
56.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"	количество разработанной ПСД, ед.;	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций муниципальной собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	
57.	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	Доля отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, в общем количестве объектов капитального ремонта подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"	процент	100	2023	100	100	100	-	-	Оснащение недостающими или нуждающимися в замене на объектах капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
58.	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	Доля отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, в общем количестве объектов капитального ремонта подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области", установленных Соглашением по i-му муниципальному образованию на соответствующий год	единиц	100	2023	100	-	-	-	-	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, ед.	
59.	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	Доля школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области", установленных Соглашением по i-му муниципальному образованию на соответствующий год	процент	100	2023	100	-	-	-	-	Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области"	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество школьных команд (обучающиеся, учителя, родительское сообщество), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, ед.	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
Ведомственный проект "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" (всего), в том числе:	ДС ТО;
Комитет по охране объектов культурного наследия;
ДОТО	2366925,0	2739011,0	2941775,3	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		1757883,0	2109413,5	2674338,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		505927,3	484725,8	264495,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		110722,4	145140,3	2941,8	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего	ДС ТО;
Комитет по охране объектов культурного наследия	2277556,2	2410746,7	2661275,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		1706883,0	1820413,5	2419338,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		469727,4	445789,8	239275,2	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		108553,5	144812,0	2661,3	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	ДС ТО;
Комитет по охране объектов культурного наследия	2208078,6	2053090,4	2661275,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		1706883,0	1820413,5	2419338,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		416786,1	231196,0	239275,2	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		97876,2	1749,5	2661,3	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1	ДС ТО	179183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		100663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		78520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	ДС ТО	193562,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		108431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		85131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К. Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16	ДС ТО	9681,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		9681,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	ДС ТО	48209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		48209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	ДС ТО	38313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		38313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К. Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25	Комитет по охране объектов культурного наследия	38940,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		29177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		9723,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38	ДС ТО	55041,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		46972,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8013,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5	ДС ТО	134082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		108416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		25531,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44	ДС ТО	11511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		9904,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		1595,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1	ДС ТО	6350,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		5472,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		871,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	ДС ТО	67385,1	57614,9	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		58625,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8760,1	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4	ДС ТО	61054,1	51274,2	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		53063,9	44563,9	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7929,1	6659,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		61,1	51,3	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1	ДС ТО	52576,0	42796,1	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		45695,4	37195,4	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6828,0	5557,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		52,6	42,8	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1	ДС ТО	50727,5	42156,1	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		44088,8	36639,1	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6588,0	5474,8	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		50,7	42,2	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В. Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	ДС ТО	67452,6	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		58625,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8760,1	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		67,5	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А	ДС ТО	61148,6	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		53146,1	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7941,4	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		61,1	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3	ДС ТО	67452,6	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		58625,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8760,1	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		67,5	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7	ДС ТО	43695,0	33915,1	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		37976,6	29476,6	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		5674,7	4404,6	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		43,7	33,9	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3	ДС ТО	52257,2	42477,3	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		45418,3	36918,3	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6786,6	5516,5	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		52,3	42,5	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324	ДС ТО	59520,9	49741,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		51731,4	43231,4	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7730,0	6459,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		59,5	49,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2	ДС ТО	19219,9	9440,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		16704,6	8204,6	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		2496,1	1226,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		19,2	9,4	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28	ДС ТО	65423,7	55643,8	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		56861,7	48361,7	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8496,6	7226,5	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		65,4	55,6	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области	ДС ТО	41629,9	31850,1	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		36181,8	27681,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		5406,5	4136,4	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		41,6	31,9	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34	ДС ТО	60499,4	50719,4	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		52581,8	44081,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7857,1	6586,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		60,5	50,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б	ДС ТО	60190,4	50410,5	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		52313,3	43813,3	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7816,9	6546,8	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		60,2	50,4	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И. Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39	ДС ТО	62393,6	57672,7	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		54228,1	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8103,1	7490,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		62,4	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27 а	ДС ТО	67452,6	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		58625,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8760,1	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		67,5	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135	ДС ТО	56997,4	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		49538,1	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7402,3	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		57,0	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области (далее - КООКН ТО)	67452,5	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		58625,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8760,1	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		67,5	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2	ДС ТО	59358,2	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		51590,0	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7708,8	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		59,4	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50	ДС ТО	54636,5	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		47486,3	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7095,6	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		54,6	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4	ДС ТО	54973,8	57672,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		47779,4	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7139,4	7489,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		55,0	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94	ДС ТО	58683,7	57672,7	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		51003,8	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7621,2	7490,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		58,7	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3	ДС ТО	54636,4	57672,7	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		47486,2	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7095,6	7490,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		54,6	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28	ДС ТО	63068,2	57672,7	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		54814,4	50125,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8190,7	7490,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		63,1	57,7	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	ДС ТО	43145,4	28417,9	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		37499,0	24698,9	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		5603,3	3690,6	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		43,1	28,4	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1	ДС ТО	20171,2	41480,4	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		17531,4	36051,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		2619,6	5387,1	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		20,2	41,5	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	ДС ТО	0,0	78652,2	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	72360,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	6292,2	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 2/3, строение 1	ДС ТО	0,0	30372,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	27942,2	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	2429,8	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32	ДС ТО	0,0	106267,1	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	97667,9	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	8492,9	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	ДС ТО	0,0	124994,3	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	114994,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	9999,5	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	ДС ТО	0,0	12242,2	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	11262,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	979,4	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Чажемтовская СОШ", по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1	ДС ТО	0,0	112642,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	103527,6	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	9002,4	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	112,6	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. N 458	ДС ТО	0,0	125119,5	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	114994,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	9999,6	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	125,1	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ Улу-Юльская СОШ, по адресу: Томская обл., Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Советская, 18	ДС ТО	0,0	125119,5	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	114994,8	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	9999,6	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	125,1	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), в т.ч.:	ДС ТО	0,0	0,0	2661275,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Новоколоминская СОШ", по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13	ДС ТО	0,0	0,0	32021,9	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	29110,8	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	2879,1	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 5", по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,00	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Побединская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, стр. N 1, пом. N 1	ДС ТО	0,0	0,0	70615,7	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	64196,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6349,1	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	70,6	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Вороновская НОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9	ДС ТО	0,0	0,0	70563,5	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	64148,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6344,4	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	70,6	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Бабарыкинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Бабарыкино, ул. Садовая, 3	ДС ТО	0,0	0,0	80541,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	73219,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	7241,4	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Анастасьевская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Анастасьевка, пер. Школьный, 2, пом. 2	ДС ТО	0,00000	0,0	65935,1	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	59940,9	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	5928,2	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Трубачевская ООШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 4, пом. 1	ДС ТО	0,0	0,0	69915,3	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	63559,3	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6286,1	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	69,9	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Малобрагинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Малобрагино, ул. Школьная, 1а, строение 1	ДС ТО	0,0	0,0	71458,5	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	64962,2	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6424,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Куяновская СОШ", по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16	ДС ТО	0,0	0,0	65680,5	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	59709,5	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	5905,3	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ Березовская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, деревня Березовка, улица Центральная, дом 2	ДС ТО	0,0	0,0	75740,8	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	68855,2	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6809,9	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	75,7	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Вороновская СОШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Елгайская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Новопокровская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1	ДС ТО	0,0	0,0	80525,9	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	73205,3	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	7240,1	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Халдеевская ООШ", по адресу: Томская область, Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а	ДС ТО	0,0	0,0	69923,1	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	63566,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6286,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	69,9	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Зональненская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Петуховская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20	ДС ТО	0,0	0,0	69365,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	63059,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	6236,6	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Новорождественская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МКОУ "Усть-Тымская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Береговая, 65	ДС ТО	0,0	0,0	65234,8	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	59304,3	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	5865,3	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	65,2	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко", по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Молчановская СОШ N 1", по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76	ДС ТО	0,0	0,0	64483,6	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	58621,4	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	5797,7	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	64,5	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Катайгинская СОШ", по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А. Образцова, по адресу: Томская область, Парабельского района, с. Парабель, ул. Советская, 36	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова", по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13	ДС ТО	0,0	0,0	114125,2	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	103750,1	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	10261,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	114,1	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "Северский лицей", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МБОУ "СОШ N 197", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14	ДС ТО	0,0	0,0	52639,6	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	47854,1	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	4732,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	52,6	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22, стр. 4	ДС ТО	0,0	0,0	30983,6	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	28166,9	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	2785,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "Лицей N 1 имени А.С. Пушкина г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 30, стр. 1	ДС ТО	0,0	0,0	30411,8	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	27647,1	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	2734,3	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	30,4	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
МАОУ "ООШ N 45 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 140/1	ДС ТО	0,0	0,0	124978,4	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	113616,6	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	11236,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 46 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Д. Бедного, д. 4	ДС ТО	0,0	0,0	106347,3	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	96679,3	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	9561,7	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	ДС ТО	13466,7	268,6	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		13466,7	268,6	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реализация мероприятий по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области	ДС ТО	63618,6	357656,3	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		52941,3	214593,8	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		10677,3	143062,5	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	ДС ТО	3960,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3960,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1	ДС ТО	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65	ДС ТО	5368,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		5368,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	ДС ТО	10563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		10563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	ДС ТО	3444,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3444,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0	0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	ДС ТО	5859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		5859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19	ДС ТО	4588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		4588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"	ДС ТО	10125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		4050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой	ДС ТО	11516,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		4606,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"	ДС ТО	5051,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3030,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		2020,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области	ДС ТО	0,0	357656,3	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	214593,8	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	143062,5	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	ДО ТО	58679,4	328264,3	280500,3	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		51000,0	289000,0	255000,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		7620,7	38936,0	25219,8	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		58,7	328,3	280,5	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	ДО ТО	30452,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		28342,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		2110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	ДО ТО	237,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		237,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71673,4	71673,4	179183,4	
2.	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77425,0	77425,0	193562,6	
3.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15560,7	15560,7	38901,7	
7.	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21994,6	21994,6	54986,6	
8.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53579,2	53579,2	133948,0	
9.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4600,0	4600,0	11499,9	
10.	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2537,5	2537,5	6343,7	
11.	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26954,0	26954,0	67385,1	
12.	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60993,0	
13.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21009,4	21009,4	52523,4	
14.	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20270,7	20270,7	50676,8	
15.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26954,0	26954,0	67385,1	
16.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1 А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24435,0	24435,0	61087,5	
17.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26954,0	26954,0	67385,1	
18.	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17460,5	17460,5	43651,3	
19.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20882,0	20882,0	52204,9	
20.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23784,6	23784,6	59461,4	
21.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7680,3	7680,3	19200,7	
22.	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская 28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26143,3	26143,3	65358,3	
23.	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41588,3	
24.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24175,6	24175,6	60438,9	
25.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24052,1	24052,1	60130,2	
26.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24932,5	24932,5	62331,2	
27.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26954,0	26954,0	67385,1	
28.	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22776,2	22776,2	56940,4	
29.	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26954,0	26954,0	67385,1	
30.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23719,5	23719,5	59298,8	
31.	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21832,8	21832,8	54581,9	
32.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21967,5	21967,5	54918,8	
33.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23450,0	23450,0	58625,0	
34.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21832,7	21832,7	54581,8	
35.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25202,0	25202,0	63005,1	
36.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43102,3	
37.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20151,0	
38.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3960,1	
39.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3143,0	
40.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5368,1	
41.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10563,0	
42.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3444,2	
43.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	480,0	480,0	5859,0	
44.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4588,0	
45.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6075,0	
46.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6910,0	
47.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3030,9	
48.	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4921,4	19870,8	49096,8	52880,0	58620,7	58620,7	
49.	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6927,0	19027,8	19194,0	19271,0	19271,0	19271,0	28342,1	
50.	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	96,6	138,0	198,6	237,1	237,1	237,1	237,1	
51.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13466,7	
Итого	0,0	0,0	138,0	0,0	96,6	7023,6	24087,2	39804,0	69084,9	850615,2	856355,9	2263810,3	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель <3>	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа <4>	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1.	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	179183,4	100663,0	х	х	х	
1.1.1.	Капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8, строение 1	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	179183,4	100663,0	х	х	х	
1.К.1.	Предоставлен отчет о расходах	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
1.К.2.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
1.К.3.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
1.К.4.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
1.К.5.	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	нет	-	
1.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
2.	Капитальный ремонт учебного корпуса ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	193562,6	108431,0	х	х	-	
2.К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
2.К.2.	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
2.К.3.	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
2.К.4.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
2.К.5.	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	нет	-	
2.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
3.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	9681,3	0,0	х	х	-	
3.К.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
4.	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	48209,6	0,0	х	х	-	
4.К.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
5.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	38313,4	0,0	х	х	-	
5.К.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х			Акт о приемке работ	нет	-	
6.	Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5 им. А.К.Ерохина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	38940,7	29177,9	х	х	-	
6.К.1	Предоставлен отчет о расходах	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
6.К.2	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
6.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
6.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
6.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
6.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
7.	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	55041,6	46972,7	х	х	-	
7.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
7.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
7.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
7.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
7.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
7.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
8.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Общеобразовательная школа N 5 города Асино" Томской области по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Боровая, 5	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	134082,1	108416,4	х	х	-	
8.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
8.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
8.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
8.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
8.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
8.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
9.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	11511,4	9904,4	х	х	-	
9.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
9.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
9.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
9.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
9.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
9.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
10.	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Плотниковская СОШ" по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 1	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	6350,1	5472,2	х	х	-	
10.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
10.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
10.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
10.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
10.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
10.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
11.	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125000,0	108750,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	67385,1	58625,0	х	х	-	
11.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
11.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
11.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
11.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
11.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
11.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57614,9	50125,0	х	х	-	
11.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
11.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
11.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
11.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
11.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
11.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
12.	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	112328,3	97627,8	х	х	-	
	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	61054,1	53063,9	х	х	-	
12.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
12.К.2	Заключен контракт	-	30.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
12.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	05.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
12.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	16.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
12.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	20.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
12.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт объекта МБОУ "Семеновская ООШ", расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, 4, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	51274,2	44563,9	х	х	-	
12.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
12.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
12.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
12.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
12.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
12.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
13.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	95372,1	82890,8	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	52576,0	45695,4	х	х	-	
13.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
13.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
13.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Дубровская ООШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая, 1, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	42796,1	37195,4	х	х	-	
13.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
13.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
14.	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	92883,6	80727,9	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	50727,5	44088,8	х	х	-	
14.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
14.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
14.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
14.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
14.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
14.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, строение 1, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	42156,1	36639,1	х	х	-	
14.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
14.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
14.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
14.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
14.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
14.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
15.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125125,2	108750,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	67452,6	58625,0	х	х	-	
15.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
15.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
15.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
15.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
15.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
15.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
15.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
15.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
15.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
15.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
15.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
15.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
16.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	118821,2	103271,1	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	61148,6	53146,1	х	х	-	
16.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
16.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
16.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
16.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
16.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
16.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Пудовская СОШ" по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
16.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
16.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
16.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
16.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
16.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
16.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
17.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125125,2	108750,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	67452,6	58625,0	х	х	-	
17.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
17.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
17.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
17.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
17.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
17.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Заводская СШ", по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, 3, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
17.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
17.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
17.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
17.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
17.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
17.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
18.	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	77610,1	67453,2	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	43695,0	37976,6	х	х	-	
18.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
18.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
18.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
18.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
18.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
18.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	33915,1	29476,6	х	х	-	
18.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
18.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
18.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
18.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
18.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
18.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
19.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	94734,5	82336,6	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	52257,2	45418,3	х	х	-	
19.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
19.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
19.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
19.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
19.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
19.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Баткатская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	42477,3	36918,3	х	х	-	
19.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
19.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
19.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
19.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
19.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
19.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
20.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	109261,9	94962,8	х	х	-	
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	59520,9	51731,4	х	х	-	
20.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
20.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
20.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
20.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
20.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
20.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр., N 324, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	49741,0	43231,4	х	х	-	
20.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
20.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
20.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
20.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
20.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
20.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
21.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	28659,9	24909,2	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	19219,9	16704,6	х	х	-	
21.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
21.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
21.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
21.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
21.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
21.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Анастасьевская СОШ", расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, 2, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	9440,0	8204,6	х	х	-	
21.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
21.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
21.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
21.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
21.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
21.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
22.	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	121067,5	105223,4	х	х	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	65423,7	56861,7	х	х	-	
22.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
22.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
22.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
22.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
22.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
22.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	55643,8	48361,7	х	х	-	
22.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
22.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
22.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
22.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
22.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
22.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
23.	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	73480,0	63863,6	х	х	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	41629,9	36181,8	х	х	-	
23.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
23.К.2	Заключен контракт	-	30.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
23.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	05.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
23.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	16.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
23.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	20.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
23.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", с. Новосельцево, ул. Лесная, 1, Парабельского района, Томской области в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	31850,1	27681,8	х	х	-	
23.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
23.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
23.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
23.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
23.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
23.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
24.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	111218,8	96663,6	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	60499,4	52581,8	х	х	-	
24.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
24.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
24.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
24.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
24.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
24.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, д. 34, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	50719,4	44081,8	х	х	-	
24.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
24.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
24.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
24.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
24.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
24.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
25.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	110600,9	96126,6	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	60190,4	52313,3	х	х	-	
25.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
25.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
25.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
25.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
25.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
25.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 29б, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	50410,5	43813,3	х	х	-	
25.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
25.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
25.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
25.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
25.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
25.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
26.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	120066,3	104353,1	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	62393,6	54228,1	х	х	-	
26.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
26.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
26.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
26.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
26.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
26.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, д. 39, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,7	50125,0	х	х	-	
26.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
26.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
26.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
26.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
26.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
26.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
27.	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125125,2	108750,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	67452,6	58625,0	х	х	-	
27.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
27.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
27.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
27.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
27.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
27.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 33 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
27.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
27.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
27.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
27.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
27.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
27.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
28.	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	114670,0	99663,1	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	56997,4	49538,1	х	х	-	
28.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
28.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
28.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
28.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
28.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
28.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 34 г. Томска по адресу: г. Томск, просп. Фрунзе, д. 135, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
28.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
28.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
28.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
28.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
28.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
28.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
29.	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	125125,1	108750,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	67452,5	58625,0	х	х	-	
29.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
29.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
29.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
29.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
29.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
29.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Мариинская СОШ N 3 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 21, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
29.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
29.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
29.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
29.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
29.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
29.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю., председатель КООКН ТО Перетягина Е.В.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
30.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	117030,8	101715,0	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	59358,2	51590,0	х	х	-	
30.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
30.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
30.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
30.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
30.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
30.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 25 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
30.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
30.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
30.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
30.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
30.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
30.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
31.	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	112309,1	97611,3	х	х	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	54636,5	47486,3	х	х	-	
31.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
31.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
31.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
31.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
31.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
31.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МБОУ "Школа-интернат N 1 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 50, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
31.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
31.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
31.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
31.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
31.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
31.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
32.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	112646,4	97904,4	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	54973,8	47779,4	х	х	-	
32.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
32.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
32.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
32.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
32.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
32.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 26 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,6	50125,0	х	х	-	
32.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
32.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
32.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
32.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
32.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
32.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
33.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	116356,4	101128,8	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	58683,7	51003,8	х	х	-	
33.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
33.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
33.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
33.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
33.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
33.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 23 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 94, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,7	50125,0	х	х	-	
33.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
33.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
33.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
33.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
33.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
33.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
34.	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	112309,1	97611,2	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	54636,4	47486,2	х	х	-	
34.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
34.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
34.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
34.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
34.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
34.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 67 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,7	50125,0	х	х	-	
34.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
34.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
34.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
34.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
34.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
34.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
35.	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	120740,9	104939,4	х	х	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	63068,2	54814,4	х	х	-	
35.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
35.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
35.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
35.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
35.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
35.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю..	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия N 56 г. Томска" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 28, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	57672,7	50125,0	х	х	-	
35.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
35.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
35.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
35.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
35.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
35.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
36.	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	71563,3	62197,9	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	43145,4	37499,0	х	х	-	
36.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
36.К.2	Заключен контракт	-	30.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
36.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	05.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
36.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	16.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
36.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	20.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
36.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, 74	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	28417,9	24698,9	х	х	-	
36.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
36.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
36.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
36.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
36.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
36.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
37.	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1	01.01.2024	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	61651,6	53583,2	х	х	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	20171,2	17531,4	х	х	-	
37.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
37.К.2	Заключен контракт	-	30.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
37.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	05.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
37.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	16.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
37.К.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	20.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
37.К.6	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
	Капитальный ремонт здания МКОУ "Сосновская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14/1, в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	41480,4	36051,8	х	х	-	
37.К.7	Предоставлен отчет о расходах	-	31.01.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
37.К.8	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.03.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
37.К.9	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
37.К.10	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
37.К.11	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
37.К.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
38.	Капитальный ремонт ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	78652,2	72360,0	х	х	-	
38.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
38.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
38.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
38.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
38.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
38.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
39.	Капитальный ремонт нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	30372,0	27942,2	х	х	-	
39.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
39.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
39.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
39.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
39.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
39.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
40.	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	106267,1	97667,9	х	х	-	
40.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
40.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
40.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
40.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
40.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
40.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
41.	Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124994,3	114994,8	х	х	-	
41.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
41.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
41.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
41.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
41.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
41.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
42.	Капитальный ремонт нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	12242,2	11262,8	х	х	-	
42.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
42.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
42.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
42.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
42.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
42.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
43.	Капитальный ремонт МБОУ "Чажемтовская СОШ", по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	112642,6	103527,6	х	х	-	
43.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
43.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
43.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
43.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
43.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
43.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
44.	Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. N 458	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125119,5	114994,8	х	х	-	
44.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
44.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
44.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
44.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
44.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
44.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
45.	Капитальный ремонт МАОУ Улу-Юльская СОШ, по адресу: Томская обл., Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Советская, 18	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	125119,5	114994,8	х	х	-	
45.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
45.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
45.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
45.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
45.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
45.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2025	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
46.	МБОУ "Новоколоминская СОШ", по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино, ул. Обская, 13	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	32021,9	29110,8	х	х	-	
46.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
46.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
46.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
46.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
46.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
46.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
47.	МОУ "СОШ N 5", по адресу: Томская область, городской округ Стрежевой, 4 мкр., д. 460	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
47.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
47.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
47.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
47.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
47.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
47.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
48.	МКОУ "Побединская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Ленина, 12а, стр. N 1, пом. N 1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	70615,7	64196,0	х	х	-	
48.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
48.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
48.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
48.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
48.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
48.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
49.	МКОУ "Вороновская НОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	70563,5	64148,6	х	х	-	
49.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
49.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
49.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
49.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
49.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
49.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
50.	МКОУ "Бабарыкинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Бабарыкино, ул. Садовая, 3	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	80541,0	73219,0	х	х	-	
50.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
50.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
50.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
50.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
50.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
50.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
51.	МКОУ "Анастасьевская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Анастасьевка, пер. Школьный, 2, пом. 2	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	65935,1	59940,9	х	х	-	
51.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
51.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
51.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
51.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
51.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
51.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
52.	МКОУ "Трубачевская ООШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 4 пом. 1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	69915,3	63559,3	х	х	-	
52.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
52.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
52.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
52.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
52.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
52.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
53.	МКОУ "Малобрагинская СОШ", по адресу: Томская область, Шегарский район, село Малобрагино, ул. Школьная, 1а, строение 1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	71458,5	64962,2	х	х	-	
53.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
53.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
53.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
53.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
53.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
53.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
54.	МБОУ "Куяновская СОШ", по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 16	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	65680,5	59709,5	х	х	-	
54.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
54.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
54.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
54.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
54.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
54.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
55.	МБОУ Березовская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, деревня Березовка, улица Центральная, дом 2	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	75740,8	68855,2	х	х	-	
55.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
55.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
55.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
55.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
55.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
55.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
56.	МКОУ "Вороновская СОШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
56.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
56.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
56.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
56.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
56.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
56.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
57.	МКОУ "Елгайская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Елгай, пер. Школьный, 2	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
57.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
57.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
57.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
57.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
57.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
57.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
58.	МКОУ "Новопокровская ООШ", по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, 1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	80525,9	73205,3	х	х	-	
58.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
58.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
58.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
58.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
58.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
58.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
59	МБОУ "Халдеевская ООШ", по адресу: Томская область, Томский район, д. Халдеево, ул. Лесная, 2а	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	69923,1	63566,4	х	х	-	
59.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
59.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
59.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
59.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
59.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
59.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
60.	МАОУ "Зональненская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 40 (Корпус N 1)	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
60.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
60.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
60.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
60.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
60.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
60.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
61.	МБОУ "Петуховская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Петухово, ул. Рабочая, 20	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	69365,4	63059,4	х	х	-	
61.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
61.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
61.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
61.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
61.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
61.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
62.	МБОУ "Новорождественская СОШ", по адресу: Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 52	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
62.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
62.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
62.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
62.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
62.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
62.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
63.	МКОУ "Усть-Тымская ООШ", по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Береговая, 65	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	65234,8	59304,3	х	х	-	
63.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
63.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
63.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
63.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
63.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
63.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
64.	МБОУ "Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко", по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
64.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
64.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
64.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
64.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
64.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
64.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
65.	МАОУ "Молчановская СОШ N 1", по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 76	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	64483,6	58621,4	х	х	-	
65.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
65.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
65.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
65.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
65.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
65.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
66	МБОУ "Катайгинская СОШ", по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39а	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
66.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
66.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
66.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
66.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
66.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
66.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
67.	МБОУ "Парабельская СШ" им. Н.А.Образцова, по адресу: Томская область, Парабельского района, с. Парабель, ул. Советская, 36	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
67.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
67.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
67.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
67.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
67.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
67.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
68.	МБОУ "Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова", по адресу: Томская область, Бакчарский р-н, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13, в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	114125,2	103750,1	х	х	-	
68.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
68.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
68.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
68.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
68.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
68.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
69.	МБОУ "Северский лицей", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9, в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
69.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
69.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
69.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
69.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
69.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
69.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
70.	МБОУ "СОШ N 197", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14, в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	52639,6	47854,1	х	х	-	
70.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
70.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
70.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
70.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
70.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
70.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
71.	МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
71.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
71.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
71.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
71.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
71.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
71.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
72.	МАОУ "СОШ N 31 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ачинская, д. 22, стр. 4	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	30983,6	28166,9	х	х	-	
72.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
72.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
72.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
72.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
72.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
72.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
73.	МАОУ "Лицей N 1 имени А.С.Пушкина г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 30, стр. 1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	30411,8	27647,1	х	х	-	
73.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
73.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
73.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
73.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
73.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
73.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
74.	МАОУ "ООШ N 45 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 140/1	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	124978,4	113616,6	х	х	-	
74.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
74.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
74.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
74.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
74.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
74.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
75.	МАОУ "СОШ N 46 г. Томска", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Д.Бедного, д. 4	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	106347,3	96679,3	х	х	-	
75.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
75.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
75.К.3	Начаты работы по проведению капитального ремонта	-	10.07.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
75.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	10.10.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
75.К.5	Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ	-	15.11.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Фотоматериалы	да	-	
75.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2026	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
76.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В, в части ремонта фасада, дверей и системы видеонаблюдения	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	3960,1	0,0	х	х	-	
76.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
76.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
76.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
76.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
77.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3, строение 1	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	3143,0	0,0	х	х	-	
77.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
77.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
77.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
77.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
78.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения школы ОГКОУ "Александровская школа-интернат" по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	5368,1	0,0	х	х	-	
78.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
78.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
78.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
78.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
79.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	10563,0	0,0	х	х	-	
79.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
79.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
79.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
79.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
80.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта нежилого строения ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 44	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	3444,2	0,0	х	х	-	
80.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	нет	-	
80.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
80.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
80.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
81.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус", расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 42, стр. 1	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	5859,0	0,0	х	х	-	
81.К.1	Заключен контракт	-	30.09.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
81.К.2	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
81.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
81.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
82.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 19	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	4588,0	0,0	х	х	-	
82.К.1	Заключен контракт	-	30.09.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	-	
82.К.2	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
82.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.11.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	нет	-	
82.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	нет	-	
83.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБОУ "Чажемтовская СОШ"	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	10125,0	0,0	х	х	-	
83.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
83.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
83.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
83.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
84.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МОУ "СОШ N 4" г.о. Стрежевой	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	11516,7	0,0	х	х	-	
84.К.1	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
84.К.2	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
84.К.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
84.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
85.	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МАОУ "Улу-Юльская СОШ"	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	5051,5	0,0	х	х	-	
85.К.2	Объявлены конкурсные процедуры	-	10.05.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Извещение	да	-	
85.К.3	Заключен контракт	-	10.06.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	да	-	
85.К.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.10.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Отчет	да	-	
85.К.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.12.2024	Начальник ДС ТО Ассонов Д.Ю.	х	х	-	-	Акт о приемке работ	да	-	
86.	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	01.01.2024	31.12.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	667444,0	595000,0	х	х	х	
	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	58679,4	51000,0	х	да	х	
86.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Областной закон	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	ГИИС "Электронный бюджет"	
86.К.3	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	25.04.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Постановление	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.4	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	25.05.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
86.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	25.06.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
86.К.6	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.07.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ	да		
86.К.7	Приобретенные товары поставлены на баланс	-	28.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	328264,3	289000,0	х	да	х	
86.К.8	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Областной закон	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.9	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	ГИИС "Электронный бюджет"	
86.К.10	Предоставлен отчет о выполнении показателей результатов использования субсидии за 2024 год		15.03.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Отчет	да	Отчет Муниципальных образований о достижении показателей	
86.К.11	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	25.04.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Постановление	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.12	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	25.05.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	-	да	-	
86.К.13	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	25.06.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
86.К.14	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ		15.07.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ			
86.К.15	Приобретенные товары поставлены на баланс	-	28.12.2025	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
	Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	280500,3	255000,0	х	да	х	
86.К.16	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Областной закон	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.17	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	ГИИС "Электронный бюджет"	
86.К.18	Предоставлен отчет о выполнении показателей результатов использования субсидии за 2025 год		15.03.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Отчет	да	Отчет Муниципальных образований о достижении показателей	
86.К.19	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	25.04.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Постановление	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
86.К.20	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	25.05.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
86.К.21	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	25.06.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
86.К.22	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	15.07.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ	да	-	
86.К.23	Приобретенные товары поставлены на баланс	-	28.12.2026	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
87.	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	30452,1	0,0	х	да	х	
87.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Областной закон	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
87.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
87.К.3	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	25.04.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Постановление	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
87.К.4	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	01.06.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
87.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	01.07.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
87.К.6	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	-	
88.	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	237,3	0,0	х	да	х	
88.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	25.01.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Областной закон	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
88.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Соглашение	да	-	
88.К.3	Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	25.04.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Постановление	нет	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
88.К.4	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	01.06.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	нет	х	
88.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	01.07.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	нет	х	
88.К.6	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	х	х	-	-	Иной документ (Письмо муниципального образования Томской области)	да	Отчет Муниципальных образований о достижении показателей	

Приложение N 5

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 21.05.2024 N 368-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 13.01.2025 N 12-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент образования Томской области (далее - ДО ТО)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N пп	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год				
1.	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества	ВП	Департамент строительства Томской области (Далее - ДС ТО)	Единица	3	2023	-	1	1	-	-	Возрастающий	Да	-	
2.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ВП	ДО ТО, ДС ТО	Единица	8	2023	12	-	-	-	-	Возрастающий	Да	-	
3.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	ВП	ДС ТО	Единица	5	2023	9	-	-	-	-	Возрастающий	Да	-	
4.	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества	ВП	ДС ТО	Единица	-	-	2	-	-	-	-	Возрастающий	Да	-	

План достижения показателей ведомственного
проекта в 2024 году

N пп	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача: "Обеспечение системы среднего профессионального образования, социальной, учебно-производственной и иной инфраструктурой"	
1.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	12	
2.	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
3.	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества	ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N пп	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	прогнозный период 2027 год	прогнозный период 2028 год				
1.	Мероприятие "Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6"	Техническая готовность объекта	Процент	-	2023	100	-	-	-	-	Осуществляется капитальный ремонт недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6, в соответствии с проектно-сметной документацией	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	
2.	Мероприятие "Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций"	Количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты	Единица	8	2023	11	-	-	-	-	Осуществляется капитальный ремонт систем противопожарной защиты областных 11 объектов недвижимого имущества в 6 профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ "ТПТ" - 2 объекта, ОГБПОУ "ТТИТ" - 3 объекта, ОГБПОУ "ШТИТ" - 2 объекта, ОГБПОУ "Атпромис" - 2 объекта, ОГБПОУ "ТЭПК" - 1 объект, ОГБПОУ "КСПК" - 1 объект) в соответствии с проектно-сметной документацией	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	
3.	Мероприятие "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"	Техническая готовность объекта	Процент	-	2023	50	100	-	-	-	Осуществляется строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества	
4.	Мероприятие "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области"	Техническая готовность объекта	Процент	-	2023	0	50	100	-	-	Осуществляется строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество построенных (приобретенных) областных объектов недвижимого имущества	
5.	Мероприятие "Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта"	Количество откорректированной сметной документации, разработанной в целях строительства объектов недвижимого имущества	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Выполняется корректировка по сметной документации строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области	Благоустройство территории, строительство объектов недвижимого имущества	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества	
6.	Мероприятие "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях строительства которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществление инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"	Благоустройство территории, строительство объектов недвижимого имущества	Количество разработанных и откорректированных ПСД в целях строительства объектов недвижимого имущества	
7.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
8.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
9.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши здания общежития ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
10.	Мероприятие "Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, 45	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
11.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 10	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
12.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
13.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
14.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	
15.	Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21"	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Осуществляется разработка ПСД и проведение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество областных объектов недвижимого имущества, в целях проведения капитального ремонта которых разработана проектная документация	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год	
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" (всего), в том числе:	ДО ТО, ДС ТО	154988,2	97601,5	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		154988,2	97601,5	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6" (всего), в том числе:	ДС ТО	4204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		4204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе:	ДО ТО	37712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		37712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2" (всего), в том числе:	ДС ТО	4187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		4187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2" (всего), в том числе:	ДС ТО	79234,8	47911,5	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		79234,8	47911,5	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" (всего), в том числе:	ДС ТО	0,0	49690,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	49690,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта" (всего), в том числе:	ДС ТО	303,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		303,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1", в том числе:	ДС ТО	6339,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		6339,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4", в том числе:	ДС ТО	8121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		8121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1", в том числе:	ДС ТО	1624,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		1624,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45", в том числе:	ДС ТО	2641,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		2641,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10", в том числе:	ДС ТО	952,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		952,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1", в том числе:	ДС ТО	1165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		1165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2", в том числе:	ДС ТО	958,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		958,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103", в том числе:	ДС ТО	4480,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		4480,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21", в том числе:	ДС ТО	3064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		3064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N пп	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4204,2	
2.	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	15556,4	18568,8	21194,2	37712,6	
3.	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79234,8	79234,8	
4.	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"	0	0	0	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	4187,1	
5.	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6.	Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,2	303,2	
7.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6339,7	6339,7	
8.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8121,4	8121,4	
9.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1624,1	1624,1	
10.	Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2641,2	2641,2	
11.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,1	952,1	
12.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1165,1	1165,1	
13.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,3	958,3	
14.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4480,4	4480,4	
15.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3064	3064	
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	19743,5	22755,9	134265,7	154988,2	

План реализации ведомственного проекта

N пп	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1	Задача: "Обеспечение системы среднего профессионального образования, социальной, учебно-производственной и иной инфраструктурой"	
1.1.	Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18, стр. 6" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	4204,2	0,0	х	х	х	
1.1. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.1. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.1. К.3.	Техническая готовность объекта, %	-	30.06.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.1. К.4.	Техническая готовность объекта, %	-	01.08.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.1. К.5.	Проведен промежуточный мониторинг выполнения работ	-	01.09.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.1. К 6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.2.	Проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник ДО ТО Калинюк Ю.В.	единица	11	37712,6	0,0	х	х	х	
1.2. К.1	Закупка включена в план закупок	-	31.03.2024		-	-	-	-	График плана закупок	нет	-	
1.2. К.2.	Объявлены конкурсные процедуры	-	30.04.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.2. К.3.	Заключен контракт	-	01.05.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.2. К.4.	Техническая готовность объекта, %	-	30.07.2024		-	-	-	-	Справка	нет	-	
1.2. К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.08.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.3.	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2"			Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	4187,06	0,0	х	х	х	
1.3.1. К.	Услуга оказана (работы выполнены)		15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.3.2. К.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		28.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.4.	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025		место	30	126758,5	0,0	х	х	х	
1.4.1.	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	30	79234,8	0,0	х	х	х	
1.4.1 К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	31.03.2024		-	-	-	-	Техническое задание	нет	-	
1.4.1 К.2.	Закупка включена в план закупок	-	01.05.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.4.1 К.3.	Получение разрешения на строительство	-	01.06.2024		-	-	-	-	Разрешение	нет	-	
1.4.1 К.4.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	-	01.06.2024		-	-	-	-	Государственный контракт	нет	ЕИС закупки	
1.4.1 К.5.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	01.08.2024		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.4.1 К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.4.1 К.7.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	27.12.2024		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.4.2.	Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	30	47911,5	0,0	х	х	х	
1.4.2. К.1.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	30.04.2025		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.4.2. К.2.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	30.06.2025		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.4.2. К.3.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.08.2025		-	-	-	-	Заключение	нет	-	
1.4.2. К.4.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	05.08.2025		-	-	-	-	Разрешение	нет	-	
1.4.2. К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2025		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.4.2. К.6.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2025		-	-	-	-	Иной документ (Свидетельство о собственности/Выписка из ЕГРН)	нет	-	
1.5.	Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: "Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" с проведением экспертизы сметной документации в части проверки определения сметной стоимости строительства объекта"	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	50	303,2	0,0	х	х	х	
1.5.1. К.	Услуга оказана (работы выполнены)		15.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.5.2. К.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		28.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.6.	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	50	63741,1	0,0	х	х	х	
1.6.1.	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	50	0,0	0,0	х	х	х	
1.6.1 К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	31.03.2024		-	-	-	-	Техническое задание	нет	-	
1.6.1 К.2.	Закупка включена в план закупок	-	01.05.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	-	
1.6.1 К.3.	Получение разрешения на строительство	-	01.06.2024		-	-	-	-	Разрешение	нет	-	
1.6.1 К.4.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	-	01.06.2024		-	-	-	-	Государственный контракт	нет	-	
1.6.1 К.5.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	30.08.2024		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.6.1 К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.6.1 К.7.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	27.12.2024		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.7.2.	Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	место	50	49690,0	0,0	х	х	х	
1.7.2 К.1.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	30.06.2025		-	-	-	-	Иной документ (Отчет)	нет	-	
1.7.2 К.2.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.08.2025		-	-	-	-	Заключение	нет	-	
1.7.2 К.3.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	05.08.2025		-	-	-	-	Разрешение	нет	-	
1.7.2 К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2025		-	-	-	-	Платежное поручение	нет	-	
1.7.2 К.5.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2025		-	-	-	-	Иной документ (Свидетельство о собственности/Выписка из ЕГРН)	нет	-	
1.8.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	6339,7	0,0	х	х	х	
1.8. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.8. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.8. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.8. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.9.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	8121,4	0,0	х	х	х	
1.9 К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.9. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.9. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.9. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.10.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши жилого здания ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46/1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	1624,1	0,0	х	х	х	
1.10. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.8. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.10. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.8. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.11.	Выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 45, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	2641,2	0,0	х	х	х	
1.11. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.11. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.11. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет или письмо	нет	-	
1.11. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.12.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 10, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	952,1	0,0	х	х	х	
1.12. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.12. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.12. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.12. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.13.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого строения ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	1165,1	0,0	х	х	х	
1.13. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.13. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.13. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет или письмо	нет	-	
1.13. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.14.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Колпашевский социально-промышленный колледж" по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	958,3	0,0	х	х	х	
1.14. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.14. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.14. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.14. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.15.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания общежития ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	4480,4	0,0	х	х	х	
1.15. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.15. К.2.	Заключен контракт	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.15. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.15. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-	
1.16.	Выполнение обмерных работ, разработка проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум" по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Директор ОГКУ "Облстройзаказчик" Иванин И.А. (по согласованию)	х	х	3064,0	0,0	х	х	х	
1.16. К.1.	Объявлены конкурсные процедуры	-	31.03.2024		-	-	-	-	Извещение	нет	ЕИС закупки	
1.16. К.2.	Заключен контракт"	-	30.04.2024		-	-	-	-	Контракт (договор) на оказание услуг	нет	ЕИС закупки	
1.16. К.3.	Документы поданы на проверку в экспертизу	-	01.10.2024		-	-	-	-	Отчет	нет	-	
1.16. К.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024		-	-	-	-	Акт выполненных работ	нет	-